함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행-2차(2015 강서구 관내 시설물 설치 및 보수공사)

우리사업소에서 시행중인 『2015년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수 공사(장기계속단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(2차)을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2015년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가)

나. 공사기간 : 2015. 4. 7 〜 2016. 4. 30

다. 도 급 자 : 카본코리아(주), 대표 구본영

라. 설계변경 사유 : 신규공종, 계약물량 증 ․ 감

마. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비

상수도사업비,영업비용,배급수비,기타교체비

바. 설계변경 내역                                               (단위 : 원)

구 분	총 부기금액		1차분		2차분		비고
	당 초	변 경	당 초	변 경	당 초	변 경
도 급 비	683,022,340	683,022,340	580,569,000	401,050,000	102,453,340	281,972,340

따로붙임  1. 설계변경계획(2차) 및 설계변경 심의위원회 개최결과 각1부.

2.  설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 심의 결과서 1부.  끝.

주무관	서장원		시설관리팀장	김근용		시설관리과장	이자원		강서수도사업소장	12/21 이상래
협조자
시행	시설관리과-27655	(		)	접수		(		)
우	08013	양천구 목동동로 155	/
전화	(02)3146-4005	/전송	(02)3146-4039	/		/	대시민공개