문서번호	교량안전과-7440
결재일자	2015.12.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		특수교량팀장	교량안전과장
나용수		代임동운	12/21 이용심
협조

-15년 한강교량 온라인 안전감시시스템 유지관리용역-

설계변경시행 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12

교량안전과

(특수교량팀)

2015년 한강교량 온라인 안전감시시스템 유지관리용역

설계변경시행 검토 보고

우리시에서 시행중인 『2015년 한강교량 온라인 안전감시시스템 유지관리용역』에 대해 준공전 용역비 정산결과에 따라 설계변경을 수행하고자 함

Ⅰ		용역개요

용 역 명 : ‘15년 한강교량 온라인 안전감시시스템 유지관리 용역

대상교량 : 한강교량 11개소

(올림픽,원효,서강,성산,가양,행주,한강,성수,청담,양화,암사대교)

과업내용

- 온라인 감시시스템(센서 및 계측장비) 유지관리 및 계측결과 분석

- 시스템 소프트웨어 업그레이드 및 개선 등

용역기간 : 2015.4.20. ~ 2015.12.31.

총용역비 : 203,150,200원(이전비:17,400,000)

용 역 사 : ㈜이제이텍 대표 남순성

Ⅱ		추진사항

‘15.03.18. 용역발주

‘15.04.20. 계약 및 착수

‘15.10.14. 중간보고회

‘15.12.02. 최종보고회

Ⅲ		변경사유

직접경비에 대한 실비정산(센서 및 장비보수비) 및 이전비 금액변경

설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증, 감
총 금 액		203,150,200	194,941,160	감) 8,209,040원
용역비	공급가액	168,863,819	164,459,364	감) 4,404,455원
	부가가치세	16,886,381	16,445,936	감) 440,445원
	소 계	185,750,200	180,905,300	감) 4,844,900원
이 전 비(인터넷)		17,400,000	14,035,860	감) 3,364,140원

Ⅳ		향 후 계 획

상기와 같이 설계변경 및 변경계약을 재무과에 의뢰코자 함.  끝.