함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	변경계약 의뢰(가리봉동 2-175~121-44 외 3개소 배급수관 정비공사)

1. 우리사업소에서 시행하는 “가리봉동 2-175~121-44 외 3개소 배급수관 정비공사”에 대하여 설계변경을 시행하고 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 가리봉동 2-175~121-44 외 3개소 배급수관 정비공사

나. 도 급 자 : 삼진엔지니어링 대표 정강현

다. 공사기간 : 2015. 05. 06 ~ 2015. 12. 22

라. 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비(노후관정비)

마. 설계변경 사유 : 공종별 계약물량 증․감 및 신공종 발생

바. 설계변경 내역                                          (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감 액	비 고
총 공사비	1,178,272,370	1,140,727,000	감) 37,545,370
도 급 비	406,272,370	368,727,000	감) 37,545,370	감) 9.2%
관급자재비	302,000,000	302,000,000	-
복구비 및 기타	470,000,000	470,000,000	-

따로붙임 :  1. 설계변경 계획보고서 및 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서 및 산출서, 제비율검증대장 각 1부.

3. 설계변경 심의결과서 및 합의서 1부. 끝.

	강서수도사업소장
★주무관	이용호		급수운영과장	12/22 조면행
협조자	주무관	이상무
시행	급수운영과-31897	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-3949	/전송	02-3146-3989	/	l*********3@seoul.go.kr	/	부분공개(7)