문서번호	방재시설부-17443
결재일자	2015.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
노태학		이도헌	12/22 임춘근
협조
	주무관		장수철

『용두3빗물펌프장 신설공사 폐기물처리용역(총차,2차)』

준공기한 연기검토보고

2015. 12.

방재시설부

준공기한 연기 검토 보고

《용두3 및 신이문 빗물펌프장 신ㆍ증설공사 폐기물처리용역(총차,2차)》

사업개요

용 역 명 : 용두3 및 신이문 빗물펌프장 신ㆍ증설공사 폐기물처리용역

용역개요

(단위: 톤)

구 분	총 차	1 차	2 차	비 고
계	3,250	2,349	901
페콘크리트	2,314	1,932	382
폐아스콘	714	195	519
건설폐기물	222	222	-

용역기간 : 2013. 4. 23 ~ 2015. 12. 31

용 역 비 : 79,556,400원(2차 21,905,400원)

용 역 자 : ㈜오성디엔이  대표 이두희

위탁감독 : 서울시시설관리공단 공사감독2처

관련근거

관련근거 : 서울시시설관리공단 공사감독2처-20734호(2015.12.21)

준공기간 연기사유

연기사유

- 용두3 빗물펌프장 전면 재설계와 관련하여 토목 준공기한 연기에

따라 폐기물처리용역의 준공기한을 공사의 준공기한에 맞춰 연기

변경내용

구 분	당 초	변 경	비 고
총 차	'13. 4. 26∼ '15. 12. 31	'13. 4. 26∼ '16. 6. 30
2 차	'15. 7. 1∼ '15. 12. 31	'15. 7. 1∼ '16. 6. 30

연기에 따른 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

지체상금 부과여부 : 미부과

조치계획

서울시시설관리공단에서 제출한 준공기한 연기 실정보고에 대하여

내용검토 한 바 타당하기에 준공기한을 연기하여 용역추진에 만전을

기하고자함

붙임 : 1. 시설공단 준공기한 연기 검토보고서 1부. 끝.