함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(2015년 성동구 관내 상수도공사 등 건설폐기물처리용역)

우리사업소 시행중인『2015년 성동구 관내 상수도공사 등 건설폐기물처리용역』에 대하여 설계변경을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 2015년 성동구 관내 상수도공사 등 건설폐기물처리용역

나. 계 약 자 : 현대환경㈜ 대표 고광만

다. 용역기간 : 2015.07.01. ~ 2016.06.30.

라. 설계변경 사유 : 공사별 폐기물 물량 증․감에 따른 물량조정

마. 설계변경 금액내역

(단위:원)

구분	당초	변경	비고(증․감)
총 용역비	**********	**********	************
공급가액	**********	**********	************
부가세	**********	**********	**********

바. 예산과목 및 예산액

- 자본적지출,유형자산취득,구축물(송배수관정비),시설비및부대비,시설비

-  자본적지출,유형자산취득,구축물(배급수관정비),시설비및부대비,시설비

첨 부 : 1) 설계변경 심의위원회 개최 결과 보고서 1부.

2) 설계변경 심의 의결서 1부.

3) 설계변경 심의 의뢰서 1부.

4) 설계변경 내역서 1부.  끝.

주무관	박종대		주무관	김광운		급수운영과장	최명익		동부수도사업소장	12/22 홍현구
협조자
시행	급수운영과-34373	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2756	/전송	02-3146-2789	/	jdp1972@seoul.go.kr	/	부분공개(5)