문서번호	기전과-16379
결재일자	2015.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	기전과장	강서도로사업소장
김근수	代한영호	12/22 代이은엽

2015년 교통안전시설(안전표지) 유지보수공사(연간단가) 설계변경 (3차)계휙 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.12

강서도로사업소

(기전과)

2015년 교통안전시설(안전표지) 유지보수공사(연간단가)

설계변경 (3차) 계획보고

『2015년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)』에 대한 현재까지의 작업사항에 대하여 감리업체로부터 설계변경 서류가 제출되어 아래와 같이 검토보고합니다.

공사 개요

공 사 명 : 2015년 교통안전시설(안전표지) 유지보수공사 (연간단가)

공사기간 : 2015. 3. 9. ~ 2015. 12. 31.

도 급 액 : 90,000,000원

공사규모 : 교통안전표지 정비(신설 및 교체) 663(매·SET)

도 급 자 : ㈜강우엠테크 임 덕 빈

감 리 원 : ㈜트래픽스 김 희 수

설계변경 사유

관련근거

- ㈜트래픽스 TR-5-1243(2015.12.22)호 설계변경 요청

서울시지방경찰청 교통안전시설 규제심의 결과와 각 관할경찰서,구청, 전자민원 및 기동점검 적출 등에 대한 표지 정비 작업지시에 의거 물량 증․감 발생 으로 인한 설계변경

주요 물량 증 ․ 감 내역

구 분	단위	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
교통표지판 신설	매·SET	300	401	증) 101
교통표지판 교체	매·SET	89	175	증) 86
교통표지판 도장·보수	매·SET	10	3	감) 7
교통표지판 철거·제거·조정	매·SET	71	81	증) 10
교통표지판 이설	매·SET	9	3	감) 6

공사비 변경내역

구 분		당 초	변 경	증감	비고
총공사비		90,000,000	90,000,000	-
도급비	공급가액	81,818,182	81,818,182	-
	부가가치세	8,181,818	8,181,818	-
	계	90,000,000	90,000,000	-

조치 계획

위 보고내용과 같이 작업시행한 결과 기존 설계물량이 증감되었기에 총계약금액(도급비) 범위내에서 조정하여 설계변경 시행하고 변경계약후  준공금 지급 및 준공처리 예정.

붙임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 감리 기술검토의견서 1부. 끝.