함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경(2차) 및 차수별 금액변경 계약의뢰

1. 우리사업소에서 시행중인 『2015년 관악,금천구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경 및 차수별 금액변경 계약의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2015년 관악,금천구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속)

나. 수 급 자 : ㈜석경건설 대표 김윤경

다. 계약기간 : 2015. 4. 27. ~ 2016. 4. 30.

라. 예산과목

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 기타교체비

마. 설계변경사유 : 시공물량 증․감 및 신규공종 발생

바. 설계변경 내역                                                (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
총부기금액	663,075,700	663,075,700	-	변 경 없 음
1차수금액	563,000,000	536,569,000	감26,431,000	2015년 시행
2차수금액	100,075,700	126,506,700	증26,431,000	2016년 시행

따로붙임 : 설계변경 품의서 및 관련문서 각 1부

	남부수도사업소장
★주무관	박장진		주무관	강동길		급수운영과장	12/22 이자화
협조자
시행	급수운영과-26275	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02)3146-4576	/전송	02)3146-4589	/	pjjin@seoul.go.kr	/	부분공개(7)