서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	차세대 버스정보시스템 구축 및 운영비용 산정용역 준공기한 연기 의뢰

1. 교통정보과-20639(2015.12.22.)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 추진 중인 ‘차세대 버스정보시스템 구축 및 운영비용 산정용역’과 관련하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

- 용 역 명 : 차세대 버스정보시스템 구축 및 운영비용 산정용역

- 계약금액 및 기간 : 43,605,000원 / 2015.11.2. ~ 2015.12.31

- 계약업체 : (재)한국산업평가원 (대표자 : 김재열)

나. 준공기한 연기 내역

- 연기기한 : 2016. 2. 1.

- 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

- 지상상금 부과여부 : 해당없음

- 연기사유 : ㈜한국스마트카드와 비용 산정기준 및 항목 등에 대한 합의가 지연됨에 따라 용역 준공기한 연기 필요

붙임 : 1. 준공기한 연기 계획. 1부.

2. 준공기한 연기 합의서. 1부.

3. 준공기한 연기 의뢰서. 1부. 끝.

	교통정보과장
주무관	장석민		버스정보팀장	정윤식		교통정보과장	12/22 이경순
협조자
시행	교통정보과-20670	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28(수송동) 종로소방서 5층 서울시 교통정보과	/
전화	02-2133-4971	/전송	02-2133-4990	/		/	대시민공개