문서번호	급수운영과-26272
결재일자	2015.12.22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
손현정	이경희	12/22 이자화
협 조

설계변경 사전심의 결과보고

(2015년 관악,금천구 관내 상수도(송배수관정비, 포장복구등)공사 건설폐기물 처리용역)

2015. 12.

남부수도사업소

급수운영과

명에 의거 관내 『2015년 관악,금천구 관내 상수도(송배수관정비, 포장복구등)공사 건설폐기물 처리용역)』 에 대하여 설계변경 심의위원회 개최 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  12. 22

보 고 자  직 :  지방시설주사보  손현정

□ 공사 현황

○ 용 역 명 :  2015년 관악, 금천구 관내 상수도(송배수관정비, 포장복구등)공사

건설폐기물 처리용역

○ 용역개요 : 폐기물운반 1,910㎡, 폐기물처리 4,408톤

○ 용역기간 : 2015.08.07. ~ 2016.07.30.

○ 용역금액 : 65,236,000원

○ 수 급 사 : *****************

□ 설계변경 심의 위원회 개최

○ 일    시 : 2015. 12. 22(화). 10:30

○ 장    소 : 3층 급수운영과 사무실

○ 참석위원 : 위원장 급수운영과장(1명), 심의위원(시설관리과 3명)

급수운영과 이경희외 1인

□ 심의 위원회 검토 내용

○ 시공물량 증ㆍ감에 따른 집계표상 수량 및 차수별 물량 증감 검토

○ 용역비 변경 내역

구 분	금 액		증․감	비 고
	당초	변경
1차부기금액	52,188,800	14,676,000	감 37,512,800
2차부기금액	13,047,200	50,560,000	증 37,512,800
총 부기금액	65,236,000	65,236,000	-

□ 처리의견

○ 우리사업소 설계변경 심의 위원회에서 변경설계도서에 대하여 위 사항을 검토결과 적정하게 설계변경된 것으로 심의된 바 원안 처리코자 합니다.

붙임 :  1. 설계변경내역서 1부.

2. 설계변경 사전 심의 의결 결과 1부.

3. 심의 의견서-스캔 1부.  끝.