투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	시설공사 설계변경 계약의뢰(도시고속도로 연결램프(정릉길))

‘도시고속도로 연결램프(정릉길)설치공사’ 에 대한 정산 설계변경(전체2회, 1차2회)을 하고자 계약변경의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 도시고속도로 연결램프(정릉길)설치공사

나. 도 급 비 : 총괄 8,992,500천원(1차 3,009,000천원)

다. 공사기간 : ‘13.12.30.~‘16.12.29. (1차 ‘13.12.30~‘15.12.29)

라. 계 약 자 : 풍림산업 외 1

마. 설계변경 계약금액                                      (단위 : 천원)

구 분		당초	변경	비고
계약금액	총괄(2회)	8,992,500	9,589,800	증)597,300
	1차(2회)	3,009,000	2,800,000	감)209,000

바. 설계변경사유 : 공사현장 여건반영에 따른 물량 증감에 따름

사. 예산과목 : 도로계획과, 도로건설, 도시고속도로망 확충(도시개발특별회계), 도시고속도로 연결램프 추가설치, 시설비(사고이월비)

붙 임 : 1. 공사 설계변경방침서 및 합의각서 각 1부.

2. 설겨변경내역서[1차, 총괄(별도송부)] 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	남덕희		도시고속도로과장	명경출		토목부장	12/22 代서관석
협조자	계약1팀장	김점선
시행	토목부-27773	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8666	/전송	02-3708-2599	/	heedeok@seoul.go.kr	/	부분공개(6)