함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(제2회) 및 차수별 계약금액 변경시행 (2015년 동작 영등포구시설물)

우리사업소에서 시행중인 『2015년 동작 영등포구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가계약)』에 대한 설계변경(제2회) 및 차수별 계약금액을 변경시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2015년 동작 영등포구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가계약)

나. 계약상대자 : 성신진흥산업개발(주) 대표 김보민

다. 계약기간 : 2015. 4. 6 ~ 2016. 5. 31.

라. 예산과목

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 기타교체비

마. 설계변경 사유

- 시민불편을 최소화 하기 위한 부단수공법 적용 등에 따른 신규공종 발생

- 공사현장에 적합한 시공에 따른 계약물량 증·감 발생

바. 설계변경 및 차수별 계약금액 변경내역                         (단위 : 원)

구 분	당초 계약금액	변경 계약금액	증ㆍ감
총부기금액	666,119,100	666,119,100	금액 변경 없음
1차수부기금액	566,201,000	492,118,000	감)74,083,000
2차수부기금액	99,918,100	174,001,100	증)74,083,000

붙 임 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 합의석 및 심의의결서 각 1부. 끝. 끝.

주무관	이승영		시설관리과장	代고신석		남부수도사업소장	12/22 전영석
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	시설관리과-31962	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동)	/
전화	02-3146-4599	/전송	02-3146-4639	/		/	대시민공개