문서번호	시설과-8188
결재일자	2015.12.22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	추진반장	관리부장
김형집	유인행	12/22 심상원
협 조

『서울대공원 잡용수배관 교체공사(1단계)』

실정보고에 따른 설계변경 검토 보고

2015년 12월

서 울 대 공 원

【기반시설안전추진반】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

『서울대공원 잡용수배관 교체공사(1단계)』

실정보고에 따른 설계변경 검토 보고

◇ 노후화된 대공원 기반시설의 근원적 대응을 위한 『서울대공원 잡용

수배관 교체공사(1단계)』 시행중 유지관리 편의성을 고려 배관내

배수밸브 및 이음관, 관고정 U밴드 미반영에 대한 실정보고를      다음과 같이 검토 보고함

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 서울대공원 잡용수배관 교체공사(1단계)

공사기간 : 2015. 9. 25 ~ 12. 23

시 공 사 : ㈜청보공영(대표 홍승대)

계약금액 : ￦133,795천원

주요 공사내용

- 닥타일주철관(DCIP) 1.95km 및 지지철물 설치 등

Ⅱ		설계변경 내용

주요 변경 사항

- 직관과 곡관부위 연결에 따른 이음관 반영

- 향후 유지관리 편의성 고려 배수밸브 설치

- 배관 고정용 U밴드 누락으로 반영 등

세부 변경내용

구 분		주요 변경사항		변경사유	금액 (천원)
분야	공종명	변경전	변경후
도급비	계				15,000
	관이음관 설치	-	30개소	직관과 곡관부위 연결에 따른이음관 누락으로 반영 필요	6,000
	드레인관	-	3개소	누수 발생등 비상시 용수를 배수할 수 있도록 낮은 지점에 드레인 밸브 설치	1,000
	배관 U밴드	-	426개	주철관 고정용 U밴드 설치 필요	6,000
	이형관 부설	-	84본	폐쇄된 지하구내에서 이동통로 협소 및 배관등 지장물로 인하여 인력 운반 부설 반영 필요	2,000

Ⅲ		예산변경

사업비 변경

구 분	계약금액		증 ․ 감	비 고
	변경전	변경후
도급비	133,793,560	148,793,560	15,000,000

예산집행계획

- 증가되는 공사비 15,000,000원에 대하여 설계변경 계약 추진

예산과목

- 동물사 관리기능 및 야생동물 종보전, 공원 안전시설 보수 및 정비

시설비(100-401-01)

Ⅳ		보고자 의견

설계변경 단가는 계약단가 또는 신규 품목은 낙찰율을 곱한 금액으로 단가를 적용하고,

신속한 공정관리을 위하여 설계변경 사항에 대한 선 작업지시후 준공시 설계변경(정산)코자 함

따로붙임 : 1. 설계변경 요청 공문 1부.

2. 설계도면 1부(별첨). 끝.