투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	송파구청장(도로과장)
(경유)
제목	교통안전시설 원인자부담공사 공사기한연장 승인(동남로 보행환경 개선공사-신호)

1. 송파구청 도로과-31330호(2015.12.22.)와 관련입니다.

2. 우리사업소 관내에서 시행하고 있는「동남로 보행환경개선공사 교통신호기 원인자부담공사」의 공사(준공)기한 연장승인 요청에 대하여 아래와 같이 연장승인하오니 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

- 아      래 -

가. 공 사 명 : 동남로 보행환경개선공사 교통신호기 원인자부담공사

나. 공사장소 : 송파구 동남로 오륜사거리 ~ 서하남IC입구 사거리

다. 공사내용 : 교통신호기 철거 및 신설

라. 승인내용 : 공사(준공)기한 연장

- 연장사유 : 보도공사 closing11 및 동절기 부실공사 방지

- 당 초 : 승인일 ~ 2015. 12. 31.

- 변 경 : 승인일 ~ 2016. 5. 30.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	김동현		기전과장	12/23 남궁영주
협조자
시행	기전과-13083	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33(대치동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0362	/전송	02-2040-0365	/		/	대시민공개