【별지 제2호서식】

공사계약 심사요청서

부분공개(7)

시 행	급수운영과-25037
시행일자
수 신 자	서울특별시상수도사업본부장(재무회계과장)
접 수
접수일자

주무관		급수운영과장				결재
최용진		12/23 김수영
협 조

공 사 명	월계배수지 상부 슬라브 신축이음부 보수공사			요청기관	북부수도사업소 급수운영과
공사위치	북부수도사업소 관내 월계배수지
공사기간	2015.09.23~2015.12.31	계약방법
용역금액	◯ ********************* ***************************		◯ ********************* ***************************
설계자	북부수도사업소 급수운영과
발주처	담당자 : 최용진(전화번호 : 3146-3342)
◯ 도급비 : ***************** ◯ 공사개요 - 당 초 : 인조잔디 걷기 및 시공 408.6㎡, 코아천공 2,043공, hws이중복합방수 330.91㎡ - 변 경 : 인조잔디 걷기 및 시공 607.24㎡, 코아천공 1,990공, hws이중복합방수 322.38㎡, 케미칼 앙카 설치 1,990개소
◦ 첨부서류 1. 설계도서 각1부(내역서,단가산출서,수량산출서,도면) 2 기타 심사에 필요한 서류

	북부수도사업소장