문서번호	토목부-27884
결재일자	2015.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이상욱		권혁대	12/23 代서관석
협조
	주무관		강철규

건설폐기물처리용역 설계변경(1회) 및 준공기한 연기 검토보고

(서울역 주변 교차로 개선공사)

2015.12.

도시기반시설본부

(토목부)

건설폐기물처리용역 설계변경(1회) 및 준공기한 연기 검토보고

(서울역 주변 교차로 개선공사)

『서울역 주변 교차로 개선공사』의 건설폐기물 실처리 정산분을 반영하기 위한 설계변경 및 준공기한 연기 검토보고임.

Ⅰ		관련근거

○ ENT15-49(2015.12.23.) 건설폐기물처리용역 변경요청

Ⅱ		용역개요

○ 위    치 : 서울역 주변 교차로 5개소

○ 규    모 : 폐콘크리트 938톤, 폐아스콘 2,215톤, 혼합폐기물 60톤

○ 용역기간 : '15. 8.25.∼ '15.12.31.

○ 용 역 비 : 56,185,000원

○ 용 역 사 : ㈜삼보ENT, ㈜금왕산업개발

Ⅲ		설계변경 내용

□ 설계변경(1회)

○ 용역비

·당초 :  56,185천원

·변경 : 121,803천원

○ 용역기간 연장

·당초 : '15. 8.25.∼ '15.12.31.

·변경 : '15. 8.25.∼ '16. 5.31.

※ 시설공사 준공기한 연기에 따라 용역기간 연장

□ 설계변경(1회)

○ 설계변경 내역

공 종	단위	수 량			비 고
		당 초	변 경	증·감
폐콘크리트	톤	938	3,342	2,404
폐아스콘	톤	2,215	3,079	864
혼합폐기물	톤	60	60	-

○ 용역비 증감현황                                   (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
공급가액	51,077,273	110,730,000	59,652,727
부가가치세	5,107,727	11,073,000	5,965,273
총용역비	56,185,000	121,803,000	65,618,000

□ 용역기간 변경

구 분	당 초	변 경	비 고
용역기간	'15. 8.25.∼ '15.12.31.	'15. 8.25.∼ '16. 5.31.	준공기한연장 (5개월)

Ⅳ		조치계획

○ 건설폐기물 실처리 정산분을 반영한 설계변경 및 시설공사 준공기한 연기에 따른 준공기한 연기는 적정한것으로 판단되어 계약사항을 조정하고자함.

○ 연기에 따른 귀책소재 : 도급계약자 귀책사유 없음(지체상금 미부과)

붙  임 : 설계변경내역서(1회) 1부.  끝.