투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경(정산) 시행(2015년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)-강서)

우리 사업소에서 시행중인 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사를 아래와 같이 설계변경(정산) 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2015년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)-강서

나. 공사기간 : 2015. 3. 24 ~ 2015. 12. 31

다. 공사개요 : 차선도색 243,250m,  차선제거 15,000m, 표지병설치 600개

라. 도 급 자 : 엘씨씨건설(주) 대표 심 강 보

마. 변경사유 : 작업 완료에 따른 작업물량 증 ․ 감

바. 변경내역

구 분		금 액		비 고(증·감)
		당 초	변 경
도급비	공 급 가 액	465,500,000	465,800,000	증) 300,000
	부가가치세	46,550,000	46,580,000	증) 30,000
	계	512,050,000	512,380,000	증) 330,000

사. 예산과목 :

-교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물 관리, 노면

표시 도색 및 제거, 시설비(380,684,470원)

-교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리강화,

도로교통소통개선, 시설비(11,438,000원)

-교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 버스서비스이용제고, 중앙

버스전용차로흐름개선, 시설비(11,383,530원)

-도로관리과, 도로시설물관리, 도로굴착복구, 도로굴착복구공사, 시설비

(32,347,000원)

-교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리강화,

교통사고잦은곳개선, 시설비(76,527,000원)

붙임 : 1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	김동민		도로보수과장	김권일		강서도로사업소장	12/23 代이은엽
협조자	관리단속과장	이은엽		계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-12583	(		)	접수		(		)
우	07520		/
전화		/전송		/		/	대시민공개