문서번호	계획설계과-3230
결재일자	2015.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계획설계과장	급수부장
최영서		박기범	12/23 이규상
협조

’15년 회계연도 세출예산 ‘물수요관리 종합계획’

사고이월 보고

2015. 12.

상수도사업본부

(급 수 부)

작 성 자	급수부장 : 이규상 ☎3146-1401 계획설계과장 : 박기범 ☎1410 담당 : 최영서 ☎1417

2015년 회계연도 세출예산‘물수요관리 종합계획’

사고이월 보고

우리 본부에서 시행 중인 ‘2020 서울특별시 물 수요 관리 종합계획 학술용역’과 관련하여 사고이월 사유가 발생하여 보고 드림.

Ⅰ		사업개요

▢ 사 업 명 : 물수요관리 종합계획

○ 사업내용 : ‘2020 서울특별시 물수요관리 종합계획’ 수립 학술용역

▢ 사 업 비 : 325,000천원

▢ 학술용역 개요

○ 용 역 명 : 2020 서울특별시 물수요관리 종합계획 학술용역

○ 용 역 자 : (재)서울연구원 대표 김수현

○ 용역기간 : ’15. 3. 25. ~ ’16. 3. 31.(용역비 : 273,850천원)

○ 주요내용

- 물 수요 관리 목표 설정

- 물 수요 관리 추진계획 수립 등

Ⅱ		예산집행내역

▢ 예산과목

○ 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 사무관리비

▢ 집행내역

(단위 : 천원)

예 산 액	예산현액	배 정 액	지출원인행위액	지 출 액	사고이월액	불 용 액
325,000	325,000	283,000	273,850	0	273,850	51,150

※ 불용사유 : 계약심사 감액(325,000→282,326, 감42,674),

낙찰차액(282,326→273,850, 감 8,476)

Ⅲ		사고이월 사유

▢ 본 종합계획을 환경부장관(수도정책과)에게 승인 받아야 하며, 환경부장관은 종합계획을 승인하기 전에 국토교통부장관과 협의해야 하는 등 여러 절차가 남아있어 ’16. 3. 31.까지 준공기한을 연기하였음.(계획설계과-2408호, 2015. 11. 26.)

Ⅳ		조치의견

▢ 상기 보고 내용과 같이 금년도에 용역 준공처리가 불가하므로 사고이월하여 사업추진에 만전을 기 하고자 함.  끝.