문서번호	토목부-27912
결재일자	2015.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
이석근		이승우	12/23 代서관석
협조

준공기한 연기보고

[한강상교량 연결램프 구조개선(강북지역)실시설계용역]

2015. 12.

도시기반시설본부

토 목 부

준 공 기 한   연 기 보 고

[한강상교량 연결램프 구조개선(강북지역) 실시설계용역]

용역개요

○ 용역명 : 한강상교량 연결램프 구조개선(강북지역) 실시설계용역

○ 위  치 : 한남대교 및 성수대교북단

○ 규  모 :

- 한남대교 : Ramp-A (L=872m), Ramp-B (L=610m)

- 성수대교 : Ramp-A (L=576m), Ramp-B (L=510m)

동부간선도로 연결로 확장 및 개선 (L=1,100m)

○ 기  간 : 2014.12.29. ~ 2015.12.31.

○ 용역비 : 1,444,350,000원(계약)

○ 용역사 : ㈜극동엔지니어링  대표  이철준외 2

용역기한 연기

구 분	당 초	변 경
용역기간	2014.12.29.~2015.12.31.	2014.12.29.~2016. 3.31.
도 급 비	1,444,350,000원	변경없음

연기에 따른 귀책사유 : 서울특별시 도시기반시설본부

지체상금 : 미부과

연기사유

○ 본 설계는 한남대교 및 성수대교북단에 램프를 설치하여 동부간선도로의

상습 지·정체 해소를 위한 사업으로서,

- 성수대교북단 연결램프 실시설계 노선안 검토에 따른 용역기간 부족

- 설계ve, 건설기술심의 등 행정절차 이행에 따른 용역기간 부족

- 성수대교북단램프 추진여부 정책포럼결과 확정지연 등

조치의견

○ 위 사유에 의거 준공기한 연기가 불가피하므로 용역기한을 연기조치

하여 업무추진에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1)준공기한 연기의뢰서 1부.

2)공문서 사본 각 1부.  끝.