문서번호	토목부-27913
결재일자	2015.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
시희식		명경출	12/23 代서관석
협조

설계용역 정산에 따른 실정보고

(강남순환도로4공구 시점부 지하차도 보완설계용역)

2015. 12.

도시기반시설본부

(토목부)

설계용역 정산에 따른 실정보고

(강남순환도로4공구 시점부 지하차도 보완설계용역)

「강남순환도로4공구 시점부 지하차도 보완설계용역」의 설계용역 실정산에 의한 변경(감)사항이 있어 검토 보고드림

(설계자문비 : 감) 1,500천원)

개 요

용역명 : 강남순환도시고속도로(4공구) 시점부 지하차도 보완설계용역

위  치 : 금천구 독산동 ~ 광명시 시흥동(시흥대교 서측)

규  모 : 지하차도 연장 655m, 폭 9.9~21m(왕복4차로)

기  간 : 2014. 8.1 ~  2015. 12. 31.

용역비 : 490,000천원

용역업체 : ㈜서영엔지니어링 대표 박광준,최태형

추진현황

‘07. 1. 4. : 서부간선 민자민간투자 사업 시행방침

‘13. 6. 3 ; 서남부지역 발전을 위한 서부간선도로 지하화 추진계획 검토보고  (행정2부시장 방침 제185호)

- 당 초 : 서부간선지하도로→ 강남순환도로→ 서해안고속도로

- 변 경 : 서부간선지하도로→ 서해안고속도로

‘14. 5. 9 ; 지하차도 접속계획 보고(도기본 → 도로계획과)

‘14. 5. 27 ; 사업계획변경 조정위원회 심의(도기본 → 기술심사 담당관)

‘14. 6. 12 ; 지하차도 설계방향 제시(도로계획과→도기본)

- 주노선은 안양천 서측도로 접속으로 시행

‘14. 7.11. : 강남순환도로시점부 보완설계용역 시행(본부장 방침)

- 실시설계 용역비(309 백만원)

‘13. 2. 7. : 서해안고속도로 접속허가(서울시 ↔ 국토부(도로공사))

‘14.11.13. : 감사원 감사답변서 제출

- 서해안고속도로 접속 1단계 공사시 2단계 연결계획을 도로공사와 협의 추진

‘14.12. 2. : 강남순환4공구 서해안고속도로접속 방안 검토보고(도시안전실장)

- 서해안고속도로로 연결램프(성산방향) 설계변경은 현재 실시설계용역을 시행하고 있는 도시기반시설본부 토목부에서 추진

- 2단계 구간 연결에 따른 비용분담(약400억원)은 도로계획과에서 국토교통부 및 한국도로공사와 협의 추진

`15. 1. 15 :  서해안고속도로접속 실시설계용역 시행계획(본부장 방침)

- 시점부 지하차보 보완설계에 포함하여 시행(증181백만원)

용역비 정산

(단위 : 원)

구 분	계약금액			비 고
	당초	변경	증·감
1.설계비	274,553,386	274,553,386	-
2.제경비 및 기술료	155,85,081	155,85,081	-
3.직접경비	-	-	-
4.측량비	12,004,885	12,004,885	-
5.인쇄비	6,112,000	6,112,000	-
6.손해보험료	3,784,211	3,784,211	-
계	452,449,563	452,449,563	-
7.공급가액	443,272,732	443,272,732	-	적용금액
8.부가가치세	44,327,268	44,327,268	-
9.설계자문비	2,400,000	900,000	(감)1,500,000	설계자문비
합계	490,000,000	488,500,000	(감)1,500,000

※ 변경(감)사유 : 설계자문비 절감(공무원 지급제외)

향후 추진계획

- 2015. 12. 30 : 설계변경 재계약 및 용역 준공처리.

붙임 : 건설사업관리용역사(설계감리)의 검토의견서 1부. 끝.