설계변경(1차) 심의 의견서

대시민공개

○ 용역명 : 2015년 강동구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역

신청 부서명	강동수도사업소 시설관리과
공사 감독원	지방시설서기 이혜진
제출 년월일	2015. 12. 23.

□ 심의 위원회 의견

- 심의일시 : 2015. 12. 23(수) 14시

- 심의의견 : 설계변경에 따른 심의 결과에 대하여 아래와 같이	의견을 제시함.

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위 원 장

시설관리과장

남정열

12/23

代송종범

타당함

위    원

주무관

송종범

송종범

타당함

위    원

주무관

김용현

김용현

타당함

위    원

주무관

한호진

한호진

타당함

위    원

주무관

김효수

김효수

타당함

위    원

주무관

권기섭

권기섭

타당함

담    당

주무관

이혜진

이혜진

설계변경(1차) 심의 설명서

□ 용역현황

○ 용 역 명 : 2015년 강동구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역(단가계약)

○ 용역개요 : 당초 - 운반량 2,342㎥, 처리량 5,324톤

변경 - 운반량 3,262㎥, 처리량 7,503톤

○ 용역기간 : 2015. 5. 20. ~ 2016. 6. 30.

○ 용 역 비 : 당초 80,153,000원,  변경 80,153,000원(금액변동 없음)

○ 계약상대자 : ㈜지솔알이에이치  대표 유 재 원

□ 설계변경 세부내용 및 사유

○ 계약물량 증․감사항 발생

- 폐아스콘 운반 : 당초 1,915㎥ → 변경 2,736㎥(증 821㎥)

- 폐콘크리트 운반 : 당초 165㎥ → 변경 300㎥(증 135㎥)

- 폐토사 운반 : 당초 262㎥ → 변경 226㎥(감 36㎥)

- 폐아스콘 처리(무대) : 당초 3,174㎥ → 변경 6,365㎥(증 3,191㎥)

- 폐아스콘 처리(유대) : 당초 1,326㎥ → 변경 64㎥(감 1,262㎥)

- 폐콘크리트 처리 : 당초 379㎥ → 변경 690㎥(증 311㎥)

- 폐토사 처리 : 당초 445㎥ → 변경 384㎥(감 61㎥)

○ 총용역비 변경사항 없음

□ 설계변경 및 차수별 부기금액 변경내용

○ 설계변경 내용                                     (단위 : 원)

구 분	당초 금액	변경 금액	비 고
총 용역비	80,153,000	80,153,000	-
용 역 비	80,153,000	80,153,000	-
관급비및기타	0	0	-

○ 차수별 부기금액 변경내용                              (단위 : 원)

구 분	당초 금액	변경 금액	증ㆍ감
총 부기금액	80,153,000	80,153,000	-
1차부기금액	60,000,000	57,757,000	감 2,243,000
2차부기금액	20,153,000	22,396,000	증 2,243,000

붙 임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.