함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	설계변경 및 차수별 변경계약 의뢰

1. 우리사업소에서 시행한 『2015년 영등포구 및 동작구 상수도 단위공사장 건설폐기물 처리용역(장기계속단가)』에 대하여 설계변경 심의를 완료하고 아래와 같이 계약의뢰 합니다.

가. 공 사 명 : 2015년 영등포구 및 동작구 상수도 단위공사장

건설폐기물 처리용역(장기계속단가)

나. 도 급 자 : 문화기업㈜  대표 박해경

다. 용역기간 : 2015. 07. 06 ~  2016. 06. 30

라. 예산과목 :

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비, 노후상수도관(송배수관)정비

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비, 노후상수도관(배급수관)정비

마. 설계변경 사유 : 현장 상태에 따른 차수별 계약물량 증․감으로 설계변경

바. 설계변경 금액내역

구 분		계(총부기금액)		당초		변경
		당초	변경	1차수	2차수	1차수	2차수
용역비	계	33,810,000	33,810,000	27,048,000	6,762,000	21,597,000	12,213,000
	용역원가	30,736,364	30,736,364	24,589,091	6,147,273	19,633,637	11,102,727
	부가가치세	3,073,636	3,073,636	2,458,909	614,727	1,963,363	1,110,273

붙임 : 1. 설계변경 사전심의 의결서 및 설계변경 내역서 각1부.

2. 합의서 및 설계변경 시행 및 심의결과 보고서 각1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	박행종		주무관	최희권		시설관리과장	12/23 우종근
협조자
시행	시설관리과-32113	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4605	/전송	02-3146-4639	/	p2net@seoul.go.kr	/	부분공개(7)