문서번호	물재생과-8725
결재일자	2015.12.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
차성민		강병수	12/24 代한병연
협조
	주무관		최승룡

2015년 건설폐기물 처리용역(연간단가)

설계변경 보고(최종)

2015. 12

중랑물재생센터

(물재생과)

2015년 건설폐기물 처리용역(연간단가)

설계변경 보고(최종)

우리 센터에서 추진 중인 『2015년 건설폐기물 처리용역(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 2015년 건설폐기물 처리용역(연간단가)

○ 용역기간 : 2015. 04. 30 ~ 2015. 12. 31

○ 도 급 액 : 금30,112,000원

○ 도 급 자 : 삼원환경(주) 대표 이명욱

□ 설계변경 사유

○ 건설폐기물 종류별 수량 증 · 감소

□ 설계변경 내용

○ 용역금액

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비고
총용역비		30,112,000	27,245,000	감2,867,000
도급비	공급가액	27,375,000	24,769,000	감2,606,000
	부가가치세	2,737,000	2,476,000	감261,000
	계	30,112,000	27,245,000	감2,867,000

○ 설계변경 주요 내용

공 종	규 격	단위	수 량			비고
			당초	변경	증감
폐아스콘 처리	아스콘	Ton	325.5	37.16	감288.34
폐콘크리트 처리	콘크리트	Ton	575.0	792.84	증217.84
혼합폐기물 처리	소각 5%	Ton	82.5	87.68	증2.18

□ 조치계획

○ 상기 내용에 대하여 설계변경하고 정산코자 합니다.

붙임 :  1. 설계변경사유서 1부.

2. 변경내역서  1부.  끝.