문서번호	설비부-16952
결재일자	2015.12.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
박병환	代배수웅	12/24 代이달영

『서울역 주변 교차로 개선 전기공사』

설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『서울역 주변 교차로 개선 전기공사』

설계변경 검토 보고

「서울역 주변 교차로 개선 전기공사」관련 교통신호 감리 및 토목부의 서부역 교차로 공사 추가요청에 따른 설계변경 검토 보고임.

관련근거

□ TR-감-1206호(’15.12.22) 설계변경 검토 보고

□ 토목부-27138호(’15.12.16.) 서부역 교차로  신호설비 공사 시행요청

공사개요

□ 위   치 : 중구 남대문로 5가 84-15 외 4개소

□ 규  모 : 서울역주변 교차로 외 4개소 신호등공사 1식

- 서울역 교차로 차량신호등 10개소 신설, 무인단속카메라 2대 신설

- 중림동삼거리 차량신호등 1조 신설, 가로등 4본 이설

- 숙대입구 차량신호등 1조 신설, 가로등 4본 철거(반납)

- 공사기간 : 2015.10.02.~ 2016.06.30

- 도 급 비 : 451,370,800원

- 시 공 사 : ㈜신흥이엔지  대표 채종근

- 감 리 사 : 교통신호감리/ ㈜트래픽스

설계변경 현황

□ 변경 도급비

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총공사비	647,985,800	1,047,026,000	증 399,040,200
계약금액	451,370,800	725,637,000	증 274,266,200
이 전 비	196,615,000	321,389,000	증 124,774,000

- 예산과목 :  도시교통본부교통운영과, 도시교통체계및소통개선, 교통소통 및 안전                   관리강화, 도로교통소통개선, 시설비

- 예산과목 :  도시개발특별회계, 도시기반시설본부 토목부, 서울역일대 활성화,

서울역7017프로젝트, 서울역고가 프로젝트, , 시설비

□ 설계변경 사유

- 서울지방경찰청 교통안전시설 심의결과(’15.11.30) 및 서부도로사업소 승인결과에 따른 물량 변경 및 서울역 고가 폐쇄일(’15.12.13) 이전에 공사 완료 및 동절기 도로굴착 통제 기간에 공사 시행으로 부득이 신호기 전선을 가공선로로 추가설치.

- 토목부 요청에 따른 서부역 교차로 교통신호 개선공사 포함 시행.

□ 설계변경 내용(별첨 설계내역서 참조)

공 종	주요 설계변경 내용	비 고
신호등 설비공사	- 가공 신호케이블 추가 및 물량 변경	증
서부 교차로 교통신호기 공사	- 서부 교차로 신호기 공종 추가	증
기타 제경비	기계경비, 산재·고용·건강·연금· 노인 퇴직공제부금, 안전관리비, 기타경비	증
이 전비	- 굴착복구비, 폐기물처리비, 설계비 등	증

보고자 검토의견

□ 서울역 고가 폐쇄 이전에 완료코자 긴급공사 및 도로굴착통제에 따른 지중선로를 가공선로로 추가 신설 등으로 설계변경이 필요.

(’16년 3월중 굴착해제 후 토목 포장공사와 병행하여 지중선공사 시행)

□ 토목부의 요청에 따른「서부역 교차로 교통개선 신호설비 공사」는 본 공사에 포함시켜 원인행위 조치.

□ ’16년 상반기에 경찰청 교통안전시설 심의 및 설계변경 자문회의(소위원회) 결과에 따라 추후 설계변경 시행코자 함.(자문회의 : 5천이상 10억미만)

□  설계변경 후 서울시 재무과에 계약변경 의뢰코자 합니다.

붙 임 :  1. 관련공문 각 1부.

2. 설계변경 내역서 1부. 끝.