투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	실정보고 승인 통보

1. 한인감리 20*******06호(’15.12.24)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 검토·보고하신 ‘서울 한양도성 흥인지문, 광희문 주변 단절된 성곽 연계성 회복공사’ 실정보고 건에 대해 아래와 같이 승인통보하니 공사준공 절차 추진에 차질이 없도록 조치하시기 바랍니다

○ 승인내용(공사비 감소 45,630천원)

- 통합형 가로등 설치(가로등 및 교통안내판 철거 포함) 물량 감소, 보도판석 및 데크계단 물량 조정. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	(주)한인전통건축감리단(귀중)(15009 서울시 영등포구 문래동1가 센터플러스 1111호 ),(주)창의건설(귀중)(13603 서울시 성북구 동소문로13길 39-2 4층 )
주무관	박영동		문화시설과장	안연수		건축부장	12/24 안재혁
협조자	주무관	김현지
시행	건축부-14851	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2630	/전송	3708-2659	/		/	대시민공개