문서번호	정수시설과-3913
결재일자	2015.12.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
박광수		전결 12/24 정인화
협조

폐흡착제 처리용역

설계변경 심의결과 보고

2015. 12.

구의아리수정수센터

폐흡착제 처리용역

설계변경 심의결과 보고

폐흡착제 처리용역시행 중 물량의 감소에 대한 설계변경을 심의하고 결과를 보고 드림.

1		용역현황

□ 용역개요

❍ 용 역 명: 폐흡착제 처리용역

❍ 용역기간: 2015. 12. 22. ∼ 2015. 12. 30.

❍ 계약금액: 금2,000,000원

❍ 계 약 자: 상록환경개발(주) 대표 정규호

❍ 용역규모

- 폐흡착제 운반처리: 19톤

2		설계변경 사항

□ 주요 변경내역

❍ 폐흡착제 운반처리: 당초 19톤, 변경 13.4톤(감5.6)

□ 총괄 변경내용

구 분	당 초	변 경	증·감
공급가액	2,000,000	1,410,000	감590,000
부가세	1,818,186	1,282,299	감535,887
도급금액	181,814	127,701	감54,113

3		심의결과

□ 설계변경의 타당성: 타당

□ 감소 물량 및 제잡비 산정과 적용 적정성 여부: 적정

□ 각종 제반규정 준수 여부: 준수

4		조치의견

□ 상기 심의 결과를 반영하여 설계변경 시행하고자 함.

붙임: 1. 설계변경 심의 의견서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.  끝.