문서번호	정수시설과-4074
결재일자	2015.12.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
김향석		12/24 안길찬
협조

전기설비 유지보수공사 연간단가

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

2015. 12.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

전기설비 유지보수공사 연간단가

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

우리 정수센터에서 시행중인 『전기설비 유지보수공사 연간단가』에 대하여 설계변경 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고 함.

1. 개최개요

가. 심의일자 : 2015. 12. 24.(목)

나. 심의장소 : 강북아리수정수센터 정수시설과 사무실

다. 심의안건 : 전기설비 유지보수공사(연간단가) 제3차 설계변경

라. 개최사유 : 신규공종 발생과 물량증감에 따른 설계변경 및 정산

2. 심의대상

가. 공 사 명 : 전기설비 유지보수공사(연간단가)

나. 계약기간 : 2015. 5. 6. ~ 2016. 3. 31.

다. 도 급 비 : 185,337,130원

다. 도 급 자 : 케이에스오전기(주)  대표 박종숙

마. 공사개요 : 정수장 및 취수장 전기설비 유지보수

3. 설계변경

가. 변경사유 : 제3차 및 4차 작업지시에 의한 물량변경 발생

나. 변경내용

- 금액변경 : 변경없음

구 분		당 초	변 경	증․감
도급비	공 사 원 가	168,488,300	168,488,300	-
	부가가치세	16,848,830	16,848,830	-
	계	185,337,130	185,337,130	-

- 시공물량(상세내역은 변경설계내역서 참조)

구 분	공 종	금 액(원)
물량감소	PE전선관 28㎜ 등 5건	(감)17,337,000
물량증가	F-CV전선 1C 6㎟ 등 56건	(증)17,424,000
제경비정산		(감)47,000
계		0

4. 심의내용 및 결과

- 설계변경 적정함

5. 조치의견

- 설계변경 심의결정 내용과 같이 공사시행 중 발생한 시공물량 증․감 및 제경비 정산에 따른 변경사항에 대하여 설계변경하여 재계약을 의뢰하고자 함.

따로붙임 1. 설계변경 심의결과서. 1부.

2. 심의 결정된 변경설계서. 1부. 끝.