투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신자	물재생과장
(경유)
제 목	변경계약 체결 통보(2015년 물재생 기계설비 보수공사-연간단가)

1. 물재생과-5443(2015.12.24.)호와 관련 『2015년 물재생 기계설비 보수공사-연간단가』 건에 대하여 아래와 같이 변경계약 체결되었음을 알려드립니다.

가. 건       명 : 2015년 물재생 기계설비 보수공사-연간단가

나. 계약 체결일 : 2015. 04. 21

다. 변경계약체결일 : 2015. 12. 24

라. 계 약 업 체 : 수영산업㈜  대표 박수영

마. 계 약 금 액 : 금314,351,050원(금삼억일천사백삼십오만일천오십원)

바. 변경계약금액 : 금332,431,000원(금삼억삼천이백삼십일만원)

ㅇ 증액 : 금18,079,950원(금일천칠만구천구백오십원)

사. 준 공 기 한 : 2015. 12. 31(변동없음)

아. 변 경 사 유 : 시공수량증.감(내역서 참조)

붙임 : 1. 공사변경계약 체결통보서 1부.

; 2. 설계변경 합의각서 1부.(변경내역 포함)  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	지두연		관리과장	이재성		난지물재생센터소장	12/24 가길현
협조자
시행	관리과-12780	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426	/
전화	02)300-8516	/전송	02)300-8518	/	nanji71@seoul.go.kr	/	부분공개(7)