문서번호	시설과-9715
결재일자	2015.12.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장
김영수	한종수	12/24 김한준
협 조

『2015년 남산 및 산하공원 시설물 보수정비공사(단가계약)』

설계변경(3회)시행보고

2015. 12

시   설   과

『2015년 남산 및 산하공원 시설물 보수정비공사』

설계변경(3회)보고

『2015년 남산 및 산하공원 시설물 보수정비공사』시행과  관련하여 현장여건 및 시공물량의 증.감 발생에 따라 설계변경을 시행하고자 보고드림

Ⅰ		공사개요

공 사 명 : 2015년 남산 및 산하공원 시설물 보수정비공사(단가계약)

공사개요

콘크리트 32㎥, 공가철거3동, 시설물도장 4,371㎡

공원내 포장 400㎡,  휀스교체 58경간,   시설물정비 1식

공사기간 : 2015.06.13. ~ 2015.12.30

계약금액 : 292,030,000원

도 급 자 : 선구산업(주)  박 찬 웅

Ⅱ		설계변경 내용

설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증	비고
공 사 비		292,030,000	311,230,000	19,200,000
도급비	공급가액	263,918,164	281,372,709	17,454,545
	부 가 세	26,391,816	28,137,271	1,745,455
	폐기물처리비	1,720,020	1,720,020	-

남산및산하공원 시설물보수정비사업, 남산및산하공원 시설물보수정비, 시설비

설계변경사유

남산 및 산하공원내 시설물 정비를 위한 시공작업지시 시공중

현장여건 및 물량증감 발생에 따른 변경

- 중랑캠핑숲 화장실정비 및 음수대누수복구 (시설과-8260)

- 장충동2가 산14-47 공가철거 (시설과-8374)

작업지시 이행에 따른 시공물량 증·감 및 계약비목(신규공종 발생등) 변경으로 인한 수량변경

Ⅲ		행정사항

『설계변경 내용』과 관련하여 현장여건에 따른 따른 신규공종 발생

및 물량변동 사항에 대하여 설계변경 및 정산시행에 반영하고자 함

붙 임 : 변경설계서 1부. 끝.