문서번호	기전과-13092
결재일자	2015.12.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		기전과장
백윤광		12/24 이영목
협 조
	주무관		박정민

『횡단보도확충정비 교통신호기공사(노원구 청계초교)』

현장실정보고 검토 및 조치계획 보고

2015. 12.

북부도로사업소

(기전과)

『횡단보도확충정비 교통신호기공사(노원구 청계초교)』

현장실정보고 검토 및 조치계획 보고

횡단보도 확충정비 교통신호기공사(노원구 청계초교) 추진 중 책임감리사(협우지여엔지니어링)로부터 현장실정에 따른 기술검토의견서가 접수되어 이를 검토하고 조치 계획을 보고함

▢ 관련근거

○ 2015. 10. 01  발주 계획 보고

○ 2015. 10. 20  공사 계약

○ 2015. 10. 22  공사 착공

○ 2015. 12. 21  현장실정보고(협우지여엔지니어링)

▢ 공사 개요

○ 공 사 명 : 횡단보도확충정비 교통신호기공사(노원구 청계초교)

○ 공사금액 : 금73,108,700원

○ 공사기간 : 2015. 10. 22 ~ 2015. 12. 31

○ 시공업체 : ㈜텔코아 대표 황 민 석

○ 공사위치 : 노원구 공릉로 431 청계초교 앞

▢ 감리사 실정보고 내용 및 검토의견

(단위 : 원)

번호	공사 장소	현 재 상 황 및 문 제 점	감리사 검토의견	변경금액(개략) (증․ 감)	사업소 의견
1	청계초교	1. 보행등 설계물량 누락분 추가필요 2. 보행지주 이설(P8→P9)을 P12으로 변경하고 P9을 디자인지주로 신설 검토. 3. 가로등통합지주 위치에 맞게 부착대 수량 및 규격 변경 필요. 4. 지중인 P2-P5구간을 가공으로 하고 지주 및 보행등위치 변경(P3,4,6)으로 케이블 물량 변경 필요	1. 보행등 설계물량 누락분 반영 - 보행신호등 신설 10조 → 11조 2. 보행지주 P9는 ∅150 디자인 적용 -지주기초∅150 및 앙카 1본 추가 3.현장여건에 맞게 부착대 수량 변경 -부착대 7m 1본 → 2본 -부착대 5m 2본 → 1본 변경 4. 현장여건에 맞게 케이블 수량 변경 -신설 553m → 589m -보도블럭 굴착배관 및 포장 변경	(감) 1,869,092원	적정
2	대진여고 (청계초교연동)	1. 지주 보호금구 호환성문제로 기존 차량등 이설 불가 2. 지주기초(P14,15)재사용을 교체로 하고 누락된 흑관지주(P17) 교체 반영 필요 3. 당초 차량등 1선, 보행등 1선 (총2선) 으로 설계되었으나 차량등 2선, 보행등 2선(총4선)으로 케이블 변경	1. 차량등 교체 물량 추가 - 이설 2조 → 교체 2조 2. 기초 제거 및 신설 2본 추가 반영 3. 현장여건에 맞게 케이블 수량 변경 -신설 353m → 532m
3	가로등	1. 가로등 맨홀부터 선로구성함에 따른 배관 및 배선 물량 변경 2. 가로등 2등용 2본, 1등용 1본을 가로등 2등용 3본 변경 필요	1. 배관 및 배선물량 수정 배관 66m → 12m 케이블 신설 340m → 195m 2. 가로등 철거 및 신설수정 2등용 철거 2본 → 3본 1등용 철거 1본 → 0본
6	간접비	1. 건강연금보험료, 노인장기요양보험 미사용에 따라 정산		(감) 1,409,608원

▢ 변경금액                                         (단위 : 원)

구 분	변 경 전	변 경 후	증ㆍ감	비 고
공급가액	66,462,455	63,481,819	(감) 2,980,636	-
부가가치세	6,646,245	6,348,181	(감) 298,064	-
총공사비	73,108,700	69,830,000	(감) 3,278,700	-

▢ 보고자 의견 및 조치사항

○ 책임감리사가 제출한 실정보고에 대해 검토한 결과 타당하다고 판단되어위와 같이 작업을 추진토록 승인하고 설계변경을 추진코자 함

붙임 : 실정보고(책임감리사) 서류 1부.  끝.