문서번호	정보통신보안담당관-23155
결재일자	2015.12.24.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

				시 민
주무관	정보통신기획팀장	정보통신보안담당관		정보기획관
이용철	이방우	박웅수		12/24 代신종우
협 조

공공 무선인터넷(WiFi) 구축사업 완료보고

2015. 12.

정 보 기 획 관

(정보통신보안담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

공공 무선인터넷(WiFi) 구축사업 완료보고

서민, 소외계층 등 시민이나 관광객 누구나 무료로 이용할 수 있는

무선인터넷 구축사업 완료에 따른 현장 설치상태, 장비기능, 과업지시서 등에 대한 검수를 실시한바, 이상없이 적합하게 설치되어 보고 함.

Ⅰ		관련근거

민선6기 60대 주요공약 (버스에서도 터진다! 서울 전역 와이파이존 구축)

공공 무선인터넷(WiFi) 구축계획 (정보통신보안담당관-13422/’15. 7.21)

공공 무선인터넷(WiFi) 구축 시행 (정보통신보안담당관-13879/’15. 7.29)

Ⅱ		사 업 개 요

건     명 : 공공 무선인터넷(WiFi) 구축

주요과업

공공무선인터넷 설치 – 600AP (자가망 390, 이통망 210)

- u-무선망 연계, 자치구 통신환경 고려한 무선 인프라 구성

- LAN 및 광케이블 포설, 전원공사, 통신함체 등 설치

- 이동통신사 AP 설치

청사 무선인터넷 보안강화 – 정보화사업 보안성 검토 결과 조치

계약금액 : 424,758,100원

계약업체 : ㈜한라정보통신

기    간 : 2015. 8. 24 ~ 12. 22

Ⅲ		세부시설내역

설치수량  : 319지역 632AP

(단위 : 지역/AP)

구 분	계		자가통신망		이동통신사망
계	319/	632	239/	429	80/	203
주요거리	90/	225	56/	123	34/	102
전통시장	6/	26	3/	6	3/	20
광 장	3/	10	2/	4	1/	6
공 원	210/	337	173/	272	37/	65
복지시설	3/	5	2/	3	1/	2
문화․관광	7/	29	3/	21	4/	8

※ 설치장소 : 붙임1 참조

시설내역

구분	품 명	규 격	단위	수량
통신 장비	산업용스위치	1000 Base-X 2포트, 10/100TX 8포트	대	111
	광송수신기	1000BASE-LX SFP, 산업용스위치용	EA	163
	광송수신기	1000BASE-X WDM용 SFP, 산업용스위치용	EA	62
	ONT	이더넷방식 1포트 이상	대	61
	VPN	센터용	대	1
	VPN	AP용	대	76
	광송수신기	LX mini-GBIC, L3 스위치용	EA	2
	PIU	OLT용, 2-Port GE-PO	EA	5
	웹인증장비	OS별 접근차단, 자동AP수집	대	1
	무선 AP	광역, 실외형	대	2

구 분	품 명	규 격	단위	수량
시설 공사	금속가요전선관(방수형)	22mm	M	1,101
	금속가요전선관 콘넥타	22mm	EA	660
	UTP 전선	CAT5e 4P	M	2,505
	광케이블	SM8C	M	610
	전원케이블	F-CV 2.5mm 3C	M	809
	FDF	12CH	EA	10
	광점퍼코드	SC-LC, 3M	EA	195
	광점퍼코드	SC-SC, 3M	EA	93
	광점퍼코드	SC-LC, 10M	EA	3
	광점퍼코드	SC-SC, 10M	EA	3
	광점퍼코드	SC-LC, 20M	EA	2
	광케이블 성단	SM	코어	502
	광케이블 접속	SM	코아	1,140
	광케이블 시험	종합시험, OTDR 측정	코아	436
	광 피그테일	1M	EA	502
	누전차단기	220V-단상(30AF이하)	EA	30
	전원콘센트	220V-노출(접지형)	EA	224
	RJ45	AMP	EA	810
	RJ45 보호캡	일반형	EA	810
	무선중계기설치	MESH형, 설치비만 반영	대	6
	함체	300×300×400, 옥외형, 방수	EA	30
	광분배기	스플리터, 1:2	EA	61
	폴대	메쉬용, 십자형 자립폴(2500mm)	EA	2
	POE 인젝터	802.3at	EA	130
	엠블럼제작	벽면부착 1,000장, 안내판용 1,000장	식	1
	XY좌표추출 및 도면작성	600AP 등록, 앰블럼부착	식	1

※ 주요 처리내용

현장실사 및 설계도서 작성     : ’15. 8.25 ～  9.20

장비, 공사자재 등 반입        : ’15. 9. 7 ～ 10.28

자치구․이동통신사 망구성     : ’15. 9.14 ～ 11. 8

장비 설치 및 시설공사         : ’15.10. 1 ～ 12.13

이동통신사 AP 설치 및 개통   : ’15.11. 1 ～ 12.13

AP 설치위치 좌표 조사        : ’15.11. 9 ～ 12.15

AP운영상태 점검 및 납품검사   : ’15.12.16 ～ 12.22

Ⅳ		점검·검사 시행

검수자 : 방송통신5급 이방우, 방송통신6급 이용철, 방송통신7급 김유식

방   법 : 설계도서 점검항목 기준검사 (붙임 2 및 4 참조)

결  과

성과물

- AP 설치 및 운영상태 점검결과 (붙임2)

- 검수결과(납품확인서, 설치확인서 포함) (붙임4)

- 검수사진 (붙임5)

- 설치 지역별 도면 (붙임6)

- 준공도서 (붙임7)

․ 광케이블 접속 선번장, 광시험성적서, AP 설치 리스트,

기술지원확약서, 주간업무일지, 보안각서  등

제반사항 : 과업지시서, 내역서 등 설계도서에 적합하게 구축.

기   간 : 2015. 12. 17 ～ 12. 22

붙 임 : 1. AP 설치현황 1부.

2. AP 설치 및 운영상태 점검 1부.

3. 계약내역 1부.

4. 검수내역 1부.

5. 검수사진 1부.

6. 설치도면(별도붙임) 1부.

7. 준공도서(별도붙임) 1부.  끝.