문서번호	기전과-9286
결재일자	2015.12.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	기전과장	성동도로사업소장
차준원	문준호	최주용	12/28 이종엽
협 조
	관리단속과장		홍영두
	주무관		이명호

『군자역외 4개소 교통사고 잦은곳 개선 교통신호기공사』

준공기한 연기 검토 보고

2015.12

성동도로사업소

(기 전 과)

『군자역외 4개소 교통사고 잦은곳 개선 교통신호기공사』

준공기한 연기 검토 보고

『군자역외 4개소 교통사고 잦은곳 개선 교통시호기공사』추진중 2016년   명시이월 사유발생 및 동절기 기상악화등 절대공기 부족에 따른 공사

지연으로 아래와 같이 공사기간을 연기하고자 합니다.

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 군자역외 4개소 교통사고 잦은곳 개선 교통신호기공사-성동

○ 공사위치 : 광진구 군자역외 4개소

○ 계약일자 : 2015. 11. 18

○ 공사기간 : 2015. 11. 23 ~ 2015. 12. 31

○ 도 급 자 : 대주전설(주) 대표 곽철순

○ 도 급 비 : 208,716,500원

○ 감 리 사 : ㈜협우지여엔지니어링

Ⅱ

준공기한 연기요청

○ 관련근거

- 기전과-8877호(2015.12.14) : 교통사고 잦은곳 개선사업(신호) 이월 요청

○ 연기요청 내용

공사명	공 사 기 간		비고
	당 초	변 경
군자역외 4개소 교통사고 잦은곳 개선 교통신호기공사-성동	2015.11.23 ~ 2015.12.31	2015.11.23 ~ 2016.06.30	공사금액 변경 없음

○ 공사기간 연장 관련 검토내용

- 도시교통본부 교통운영과 예산 명시이월 및 동절기 기상악화에 따른

절대공기 부족 사유로 공기연장

○ 연기 귀책사유 : 서울특별시 성동도로사업소

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 예산과목

- 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리강화,

교통사고 잦은 곳 개선, 시설비(401-01)

Ⅲ

보고자 의견

○ 사업 추진에 소요되는 208,716,500원은 교통운영과에서 일괄 명시이월      하였으며,

○ 도시교통본부 교통운영과 명시이월 및 동절기 기상악화로 인한 절대공      기가 부족하여 「군자역외4개소 교통사고 잦은곳 개선 교통신호기공사」      에 대하여 준공기한을 연기 공사추진에 철저를 기하고자 합니다.

붙    임 : 1. 교통사고 잦은곳 개선사업 이월 요청 및 합의각서 1부. 끝.