함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(폐흡착제 처리용역)

우리 정수센터에서 시행중인 『폐흡착제 처리용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

가. 용역개요

○ 용 역 명: 폐흡착제 처리용역

○ 도 급 자: 상록환경개발(주)

○ 도 급 비: 금2,000,000원

○ 용역기간: 2015. 12. 22. ~ 2015. 12. 30.

나. 설계변경

○ 설계변경 금액

구 분	당초금액(원)	변경금액(원)	증·감액(원)
도 급 비	2,000,000	1,410,000	감590,000

○ 설계변경사유

- 과업지시에 따른 공종별 물량 감소 발생 부분 설계 반영

다. 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

붙 임: 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 합의서 1부.

3. 관련 보고서 1부.  끝.

주무관	박광수		정수시설과장	정인화		구의아리수정수센터소장	12/28 권오식
협조자	주무관	신상용		주무관	김동석
시행	정수시설과-3928	(		)	접수		(		)
우	04981	서울시 광진구 광나루로 571 구의아리수정수센터	/
전화	02-3146-5480	/전송	02-3146-5409	/	mylu81@seoul.go.kr	/	부분공개(5)