문서번호	공간정보담당관-14132
결재일자	2015.12.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공간정보개발팀장	공간정보담당관
최지혜		代양규석	12/28 代박대군
협조

2015년 항공사진 서비스 기능개선 사업 주간업무(12월4주) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
공간정보 담당관-4594				142,560천원

2015. 12.

정 보 기 획 관

(공간정보담당관)

2015년 항공사진 서비스 기능개선 사업

주간업무(12월4주) 보고

사업명			2015년 항공사진 서비스 기능개선 사업
사업기간			`15.08.04. ~ `16.01.31.	서울시담당		공간정보담당관 최지혜
사업비			142,560천원	업체/PM		㈜씨엠월드 컨소시엄 박철희 차장
보고기간			‘15.12.21.~‘15.12.24.	전체공정율		계획 75.2% / 실시 72.2%
주요내용			1. 통계정보 개선 개발 2. 항공사진 시민서비스 웹표준 Markup,css validation 검사 및 수정 3. 항공사진 국군기무사 보안처리 검수 의뢰
주간 업무 보고
Part	금 주 실 적 (2015.12.21 ~ 2015.12.24)				차 주 계 획 (2015.12.28 ~ 2015.12.31)
사업관리	1. SSL(Secure Socket Layer)프로토콜 반영을 위한 인증서 선정 - CA(Certificate Authority) 인증 신청 협의
시스템 개발	1. 시스템 구현 - 표출 속도 향상을 위한 알고리즘 변경 - 통계정보 개선 개발 2. 웹표준 진단 - 웹표준 HTML, CSS 검사 및 수정 Markup Validation : 총 54page 중 7page 누적 : 37page CSS Validation : 총 54page 완료 3. 2015년 촬영 항공사진 서비스 설정(개발장비) - 국가정보원 보안심의 검사 의뢰				1. 시스템 구현 - 표출 속도 향상을 위한 알고리즘 변경(계속) - 통계기능 정보 개선 개발 2. 웹표준 진단 - 웹표준 HTML, CSS 검사 및 수정 3. SSL 통신을 위한 CA 인증 적용 - https 프로토콜 통신(본인확인)을 위한 CA 인증 테스트
DB구축	1. 2015년 항공사진 DB구축 - 국군 기무사 보안처리 (총:921매 중 51매 수행) 누적 : 921 매 완료 - 국가정보원 검사 의뢰				1. 2015년 항공사진 DB구축(계속) - 국가정보원 보안지역 분석 및 검토
산출물/ 별첨자료	○ 주간보고서 1부.
협조사항
對 서울시
對 용역업체
기타