투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	준공기한 연기요청[군자역외4개소 교통사고 잦은곳 개선 교통신호기공사-성동]

1. 기전과-9286호(2015.12.28.)와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인『군자역외 4개소 교통사고 잦은곳 개선 교통신호기공사-성동』에 대하여 변경계약(준공기한 연기) 의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 군자역외4개소 교통사고 잦은곳개선 교통신호기공사-성동

나. 계 약 자 : 대주전설(주) 대표 곽철순

다. 공사기간 : 2015.11.23.~2015.12.31

라. 계약금액 : 208,716,500원

마. 연기사유 : 명시이월 및 동절기 기상악화에 따른 절대공기 부족

바. 공사기간 연기

구분	공사기간		비고
	변경전	변경후
공사기간	2015.11.23~2015.12.31	2015.11.23.~2016.06.30	공사금액 변경없음

사. 연기귀책사유 : 서울특별시 성동도로사업소

아. 지체상금 부과여부 : 미부과

자. 예산과목

: 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리강화,

교통사고 잦은 곳 개선, 시설비

붙  임 : 1. 준공기한 연장 검토보고 및 합의각서 1부. 끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	차준원		주무관	문준호		기전과장	12/28 최주용
협조자
시행	기전과-9287	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 성동도로사업소 기전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1541	/전송	02-2210-1536	/	michael3770@seoul.go.kr	/	대시민공개