투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 기간연장 승인 통보[구로구 고척동 63-6 고척교 확장공사 주변]

1. 도시기반시설본부 설비부-16776(2015.12.22.)호 와 관련입니다.

2.  위 호와 관련하여 『교통안전시설 원인자부담공사 준공기한 연기 요청』에 대하여 아래와 같이 승인 통보하오니 공사품질 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

1) 공사명 : 구로구 고척동 63-6 고척교 확장공사 주변 교통안전시설물 설치공사

2) 원인자 : 서울특별시 도시기반시설본부

3) 감리사 : ㈜트래픽스

4) 시공사 : 건민전기(주)

5) 공사기간

- 당초 : 승인통지일 ~ 2015.10.30.

- 변경 : 승인통지일 ~ 2015.12.31.

3. 연기사유 : 토목공사 지연으로 인한 공사기간 연장.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(설비부장),(주)트래픽스 대표자 김희수,건민전기(주) 대표자 이강민
★주무관	홍승찬		기전과장	12/28 박재경
협조자	주무관	박태진
시행	기전과-16572	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237 강서도로사업소 기전과	/
전화	02-2657-7969	/전송	02-2657-7939	/		/	대시민공개