문서번호	시설과-9715
결재일자	2015.12.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
송병욱		김도섭	12/28 강신재
협조
	주무관		최명삼

『뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사』

2015년 세출예산 이월계획 보고

2015. 12.

상수도사업본부

(시설안전부)

『뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사』

2015년 세출예산 이월계획 보고

뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 및 건설사업관리용역, 폐기물처리용역의 일부예산을 2016년으로 이월하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

□ 사업개요

○ 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수치리시설공사

-  사업개요 : 시설현대화 70만톤/일, 고도정수처리시설 60만톤/일

-  공사금액 : 212,408백만원(7차분 : 49,275백만원)

- 공사기간 : 2009.12.04. ~ 2016.12.31.(7차분 : 2015. 1. 6 ~ 2016. 1. 2)

- 시 공 사 : ㈜삼성물산 외 2개사

○ 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수치리시설공사 폐기물처리용역

-  용역금액 : 1,113,200천원(6차분 : 460,790천원)

- 용역기간 : 2010.08.10. ~ 2016.12.31.(7차분 : 2014.12.27 ~ 2016.06.30.)

- 용 역 사 : ㈜장형기업

○ 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수치리시설공사 건설사업관리용역

-  용역금액 : 6,547백만원(7차분 : 1,039백만원)

- 용역기간 : 2009.05.25. ~ 2016.12.31.(7차분 : 2014.12.26 ~ 2016.04.14.)

- 용 역 사 : ㈜도화엔지니어링 외 1개사

□ 사업별 이월액 현황

(단위:천원)

사업구분	2015예산	지출원인행위액	지출액	이월액	비 고
계	50,775,000	50,775,000	24,780,659	25,994,341
공사(시설비)	49,275,210	49,275,210	23,643,850	25,631,360
폐기물(시설비)	460,790	460,790	274,110	186,680
건설사업관리(감리비)	1,039,000	1,039,000	862,699	176,301

□ 이월액 발생 사유

○ 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수치리시설공사 7차(시설비)

-  7차분 공사 중 여과지 퇴수밸브 교체작업 등 작업공정 지연에 따른 공사기간 증가

- 공사비 변경 : 변경없음

- 공사기간 변경 : 변경없음(공사지연 기간은 지연배상금 부과예정)

○ 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수치리시설공사 폐기물처리용역 6차(시설비)

-  공사기간 증가에 따른 용역기간 연장

- 용역비 변경 : 변경없음

- 용역기간 변경

· 당 초 : 2014.12.27 ~ 2015.12.31.

· 변 경 : 2014.12.27 ~ 2016.06.30.

○ 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수치리시설공사 건설사업관리용역 7차(감리비)

-  공사기간 증가(감리원 투입계획 조정)에 따른 용역기간 연장

- 용역비 변경 : 변경없음

- 용역기간 변경

· 당 초 : 2014.12.26 ~ 2015.12.31.

· 변 경 : 2014.12.26 ~ 2016.04.14.

□ 행정사항

○ 상기 공사의 이월 대상액을 2016년으로 이월 조치하여 사업관리에

만전을 기하고자 함.

붙  임  : 1. 용역기간 연기 방침서 1부.

2. 이월사업명세서 1부.

3. 이월사업 명세표 1부. 끝.