문서번호	시설관리과-9699
결재일자	2015.12.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
정준석		한명석	12/28 강신재
협조

용역 설계변경 심의위원회 개최결과 보고

2015. 12.

상수도사업본부

(시설관리과)

용역 설계변경 심의위원회 개최결과 보고

우리 본부에서 추진중인『대형 제수밸브 점검·정비 및 정밀안전   진단 용역(강북지역)』의 설계변경 심의위원회 개최결과를 보고 드림.

□ 용역현황

□ 용 역 명 : 대형 제수밸브 점검·정비 및 정밀안전진단 용역(강북지역)

－ 중부, 서부, 동부, 북부수도사업소 관할지역

□ 용역개요 : 대형 제수밸브 점검정비 1,745개소

정밀안전진단 107.3㎞

□ 용역기간 : 2015. 6. 3. ∼ 12. 31.

□ 계 약 액 : 886,282,000원

□ 용 역 사 : 건양엔지니어링 외 1개사

□ 설계변경 심의위원회 개최 현황

□ 일    시 : 2015. 12. 28.(월) 09:30~10:00

□ 장    소 : 시설안전부 회의실

□ 위원회 구성

- 위원장 : 시설관리과장

- 위  원 : 시설6급 이용구, 공업6급 정선교, 시설7급 김동구

- 간  사 : 시설6급 정준석

□ 심의결과 : 원안 가결

□ 설계변경 현황

❍ 설계변경 사유 : 실제 시공에 따른 물량 증감

- 제수밸브 점검정비 수량 감소 21개소

- 공기밸브 점검정비 수량 증가 68개소

❍ 설계변경 금액                                   (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
도급비	886,282,000	886,282,000	변경없음

□ 향후계획

❍ 설계변경 심의결과에 의거 설계변경 시행

붙임 : 1. 심의 의결서 1부.

2. 변경 설계서 1부. 끝.