투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 변경 요청(서남권돔야구장 주변 보행자전용도로 설치공사(다목적광장)

우리 본부에서 추진중인 『서남권돔야구장 주변 보행자전용도로(보행광장) 설치 및 고척교 확장공사』와 관련하여 공사에  소요되는 관급자재의 납품기한 변경을 아래와 같이 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

품 명	납 품 요구번호	규 격	단위	수 량	납 품 기 한		비 고
					당 초	변 경
레미콘	12-15-1-52117-00	25-24-120	개	362	‘15.12.31.	‘16. 6.30.
		25-27-150	개	126
		25-18-150	개	22

끝.

	토목부장
주무관	이상근		교량건설과장	12/28 이동훈
협조자
시행	토목부-28251	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2579	/전송	3708-2599	/	lee66sg@seoul.go.kr	/	대시민공개