문서번호	장애인복지정책과-8637
결재일자	2015.12.28.
공개여부	비공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		장애인권익보장팀장	장애인복지정책과장
문홍식		정수효	12/28 홍순길
협조
	★장애인복지정책팀장		代김희영

『등촌동 구 한국정보화진흥원』

부지 및 시설물 경비용역 연장계획

2015.12

장애인복지정책과

『등촌동 구 한국정보화진흥원』

부지 및 시설물 경비용역 연장계획

『등촌동 구 한국정보화진흥원 부지 및 시설물 경비 용역』과 관련

2016년 3월중 철거 공사시까지 용역기간을 연장하여 재산 관리에

만전을 기하고자 함

□ 용역 개요

용 역 명	용역 기간	계약 금액	용역 업체명	계약번호
등촌동 구 한국정보화진흥원 부지 및 시설물 경비용역	2015.9.23.~ 2015.12.31	24,336,260원	㈜한성안정 (왕배원)	20150*******00

□ 대상시설물 현황

❍ 위      치 : 서울시 강서구 등촌1동 645-11

❍ 건축물 규모 : 지상 5층, 지하 1층(총 연면적 7,845㎡)

❍ 대상지 면적 : 6,683㎡(제3종 일반주거지역)

❍ 관리상태

- ’05년 상태평가 D등급 판정 → 보강으로 ’09년 상태평가 B등급 판정

- ’15년 건물 안전진단 결과 D등급 판정

- 현재 건물은 공실 상태

❍ 건축물 특징

- 3개층 수평증축 후 동일규모 건물을 신축하고 두 건물을 하나로 연결, 다시 2개 층 수직증축한 덧댄 건축물

- 건물 기둥이 많음(소규모 단위 개발, 대강당, 공연, 체육시설 등 부적합)

□ 연장계획(안)

❍ 연장계약 내용

구 분		당 초	변 경	비 고
등촌동 구 한국정보화진흥원 부지 및 시설물 경비용역	용역기간	2015.9.23.~ 2015.12.31	2015.9.23.~ 2016.3.31	3개월 연장
	계약금액	24,336,260원	48,672,520원	24,336,260원 증

※ 건물 철거 후 용역기간 연장 여부는 추후 검토

❍ 연장 사유

- 2016년도 시설물 철거 비용(831,600천원)이 예산편성되고, 3월중 철거 공사가 예정됨에 따라 철거 공사시까지 시설물 유지 관리 필요

❍ 예산과목

- 장애인복지정책과, 취약계층지원, 장애인자립생활 지원, 어울림플라자 리모델링사업, 공공운영비(201-02)

□ 향후 계획

❍ 변경 계획 의뢰(→ 재무과) : 2015.12.29

❍ 시설물 철거공사 : 2016.3월중