함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서울특별시
수신	용마터널건설공사에스케이건설주식회사현장대리인정운경
(경유)
제목	공사중 교통소통대책 변경 승인 요청 건 회신

1. SK용마 제2014-39(2014.1.14)호와 관련하여, “용마터널 민간투자 건설공사” 교통소통대책 변경에 대해 아래와 같이 승인 통보하오니, 성실히 이행하시기 바랍니다.

2. 공사중 교통소통대책 변경으로 인하여 다른 공사와 공사기간 및 단계별 교통소통대책에 대한 문제가 발생할 경우 우리시와 추가협의하여 주시기 바라며, 공사로 인한 교통정체 해소 및 보행자 안전사고 예방 등을 지속적으로 실시하면서 공사를 진행하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

가. 교통소통대책 변경

구분	당초	변경	조치
용마터널 민간투자 건설공사	2차로 유지 (터널 중앙 점유)	2차로 유지 (사가정교차로 방향: 터널 위쪽 점유, 용마한신아파트 방향은 터널 중앙점유)	터널 중간 분기점 안전시설물 설치 강화 및 사전 공사 안내표지판 설치
	2014.4.11. ~2014.10.31	2014.1.20. ~2014.4.30

나. 변경사유 : 건물 철거가 늦어짐으로 인해 점유공간 변경

○ 공사 시행과정에서 부득이 승인된 교통소통대책 이행이 어렵거나, 도로추가 점유가 필요한 경우 반드시 서울시와 사전협의 및 승인을 득한후 공사를 진행하시기 바랍니다.

○ 도로점용허가를 받지 아니하거나 점용면적을 초과하여 점용함으로써 교통정체를 유발시키는 공사장은 점용허가 및 점용료 징수부서에 통보하여 변상금 또는 과태료를 부과토록 조치합니다.

○ 서울시와 협의하지 않고 공사를 진행도중 교통, 보행 민원이 발생한 경우 공사시행자(시공사, 감리사, 현장소장, 감리단장)에게는 패널티를 부여, 업무담당자는 문책토록 각 기관별 감사담당실로 통보 조치합니다.

. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박평근		교통운영팀장	최정수		교통운영과장	01/20 강진동
협조자
시행	교통운영과-1137	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15번지 서울시청 별관 1동 6층 교통운영과	/
전화	2133-2460	/전송	2133-1053	/	ppark@seoul.go.kr	/	대시민공개