문서번호	물재생과-8867
결재일자	2015.12.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
김석수		강병수	12/29 김동기
협조

액체산소외 1종 구매 설계변경 및 정산 시행 보고

2015. 12.

중랑물재생센터

[물재생과]

액체산소외 1종구매 설계변경 및 정산 시행 보고

중랑천 용수공급시설 2014년도 액체산소 외 1종구매 건에 대하여 설계변경 및 정산처리 하고자 함

Ⅰ		계 약 현 황

□ 발주방법

- 일반경쟁입찰(제한)

□ 계 약 자

- 단일시스켐(주) 대표 장세훈

□ 계약기간

- 계 약 일 : '15.3.10.

- 납품기한 : '15.12.31.

□ 계약내역

품명	단위	수량	계약금액	비고
계			189,276,000원
액체산소	kg	1,200,000	184,200,000원
액체질소	병	90	5,076,000원

Ⅱ		계약 변경 내용

□ 변경내역

구분	품명	단위	수량	계약금액	비고
당초	계			189,276,000원
	액체산소	kg	1,200,000	184,200,000원
	액체질소	병	90	5,076,000원
변경	계			96,393,090원	92,882,910원 감액
	액체산소	kg	606,290	93,065,490원
	액체질소	병	59	3,327,600원

□ 변경사유

- 약품투입 물량 증감 관련 최종정산

Ⅲ		행 정 사 항

□ 상기내용에 대하여 설계변경 및 최종정산 시행.

붙임 : 합의서1부. 끝.