서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	‘15/’16년 광화문광장 제설작업용역 설계변경 및 2차(2016)년도 계약요청

우리 과에서 진행중인 「‘15/’16년 광화문광장 제설작업용역」에 대하여 2015년(1차년)준공이후 2차(2016)년도 계약을 위하여 아래와 같이 설계변경하오니 변경계약하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : ‘15/16년 광화문광장 제설작업용역(2016년)

나. 용역개요 : 광화문광장

다. 계약금액

- 당초 : 전체 43,556,880원(1차 : 17,443,900원, 2차 : 26,112,980원)

- 변경 : 전체 26,682,980원(1차 : 570,000원, 2차 : 26,112,980원)

라. 총계약 기간 : 2015.11.20 ~ 2016. 3.15

※ 금회계약기간(2차) : 2016. 1.1 ~ 2016. 3.15

마. 용역회사 : ***********

바. 설계변경사유 : 2015년 실제 제설작업량을 반영하여 변경

사. 예산과목 : 역사도심활성화, 광화문광장 관리 운영, 공공운영비(100-201-02)

아. 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감
총 계약금액	43,556,880	26,682,980	(감) 16,873,900
1차년도(2015)	17,443,900	570,000	(감) 16,873,900
2차년도(2016)	26,112,980	26,112,980	-

따로붙임 : 1. 설계변경 사유서 및 변경내역서 1부.  끝.

	역사도심재생과장
주무관	정재현		역사도심재생과장	12/29 代김용민
협조자
시행	역사도심재생과-14357	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	02-2133-8506	/전송	02-2133-0742	/	jjhdj@seoul.go.kr	/	부분공개(6)