투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	준공기한 연장에 따른 계약변경 의뢰(상설전시 어린이 체험코너 연출 용역)

1. 전시과-223(2014.1.20)호와 관련입니다.

2. 상설전시 어린이체험코너 연출용역에 대하여 다음과 같이 준공기한을 연장 시행하고자 계약변경을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계약번호 : 20130924983-00

나. 공사명 : 상설전시 어린이 체험코너 연출 용역

다. 계약자 : 일래븐(대표: 김조일)

라. 변경내용

- 준공기한 : 2014. 2. 20까지 연장(30일)

- 계약금액 : 변경없음

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
계약기간	2013. 9. 24 – 2014. 1. 21	2013. 9. 24 - 2014. 2. 20	30일 연장

마. 변경사유

- 체험코너 워크샵 개최 후, 아날로그 실물 체험물의 추가 제작과 전시실별 안배로 인한 추가기획 및 체험전시물 제작 추가 소요(1개월)가 발생하여 과업기간 연장이 불가피함

따로 붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부

2. 준공기한 연장검토보고서.  끝.

	서울역사박물관장
주무관	김양균		전시과장	01/20 정명아
협조자
시행	전시과-224	(		)	접수		(		)
우	110-062	서울시 종로구 새문안로 55(신문로2가) 서울역사박물관 전시과	/	http://www.museum.seoul.kr/
전화	02-724-0153	/전송	02-724-0255	/	cakra71@seoul.go.kr	/	대시민공개