문서번호	시설과-9847
결재일자	2015.12.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장
전지연	한종수	12/29 김한준
협 조
	주무관		김영수

『2015년 남산 및 산하공원 폐기물 처리용역 』

준공기한 연기 검토 보고

2015. 12.

중부공원녹지사업소

(시설과)

『2015년 남산 및 산하공원 폐기물처리용역』

『2015년 남산 및 산하공원 폐기물처리용역』은 2015년 3건 공사와 연계된 용역으로 공사준공기간 미도래로 본 공사의 일정에 맞추어 연기코자함

준공기한 연기 검토 보고

1		개요

▢ 용 역 명 : 2015년 남산 및 산하공원 폐기물 처리용역

▢ 위    치 : 중부공원녹지사업소 남산 공원 및 산하공원

▢ 용역개요

	폐콘크리트	폐아스콘	폐아스콘(절삭)	혼합폐기물 (건설폐재류)	비고
처리량	6,618	1,816	1,401	259	-
운반량	6,618	3,217	-	259

▢ 용역기간 : 2015.07.14.~ 2015.12.24.

▢ 도 급 자 : 우성개발 대표 : 윤훈식

도성환경개발 대표 : 윤훈철

▢ 도 급 비 : 금195,852,000원

2		문제점 및 현황

▢ 폐기물처리용역과 연계된 시설공사(2015년 남측순환로 정비공사,석호정시설개선공사,2015년 남산 및 산하공원 시설물 정비공사)의 발생폐기물 최종 전산입력기간 필요(올바로시스템 입력)

- 2015년 남측순환로 정비공사 준공기한             : 2015.12.19.

- 석호정 시설개선공사 준공기한                       : 2015.12.15.

- 2015년 남산 및 산하공원 시설물 정비공사 준공기한 : 2015.12.30.

※ 최종작업지시기한 : 2015.12.15.

3		검토 의견

▢ 해당용역과 연계된 시설공사 준공기한 미도래따른 발생폐기물의 최종처리단계확인(올바로 시스템검증)을 위하여 공사기간 연장하고자 합니다.

4		추진계획

▢ 준공기한을 연기하고 용역을 추진하고자 합니다.

○ 용역기간 연장

- 당초 : 2015.07.14.~ 2015.12.24.

- 변경 : 2015.07.14.~ 2015.12.30.

▢ 지체상금 부과여부 검토

○ 연기사유 귀책소재 : 서울시 중부공원녹지사업소

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

5		행정사항

▢ 공원운영과 : 용역기간 연장 통보

끝.