투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	공사기간 변경 계약 의뢰(지하철 919공구 건설공사-총괄, 8차공사)

1. 도시철도토목부-16559호(2015.12.28. 본부장방침), -16635호(2015.12.30.)와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인『지하철9호선 3단계 919공구 건설공사』에 대하여 아래와 같이 공사기간 변경 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 지하철9호선 3단계 919공구 건설공사

나. 준공기한 연기내용

- 계약금액 : 변경없음

- 준공기한 연기요청 내역

공 사 명	구 분	공사기간		비 고
		당 초	변 경
지하철9호선 3단계 919공구 건설공사	총 괄	2009.12.31. ~2015.12.29	2009.12.31. ~2016.12.31
	8 차	2015.12.17 ~2015.12.29	2015.12.17 ~2016.12.31

다. 연기사유 : 지하철 9호선 3단계 총 사업기간 연장 및 지하철9호선 3단계 919공구 건설공사(8차) 절대공기 부족

라. 예산과목 : 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업,

도시철도9호선3단계건설, 시설비(201-401-01)

첨부 : 1)보고서 2부.

2)책임감리 및 시공사 준공기한 연기 관련공문 1부.  끝.

	도시철도토목부장
주무관	조태현		궤도과장	홍숭희		도시철도토목부장	12/30 김진팔
협조자
시행	도시철도토목부-16675	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 9층	/
전화	02)772-7124	/전송	02)772-7306	/	cthhsh@seoul.go.kr	/	부분공개(5)