투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	강동수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	암사정수장 앞 사거리 상수도 부단수공사 시행기간 연장 알림

1. 토목부-25470호(2015.12. 2.)와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행 중인 “선사로~고덕지구간 도로확장공사”와 관련하여 도로굴착이 승인되어 시행하기 앞서 경찰서와의 협의지연으로 구조물 설치 및 원인자 복구 등을 위해 기간 연장이 필요하여 아래와 같이 암사정수장 앞 사거리 상수도 부단수공사 시행기간이 연장됨을 알려드립니다.

가. 공 사 명 : 선사로~고덕지구간 도로확장공사

나. 굴착위치 : 강동구 암사정수장 앞 사거리

다. 도로 굴착 기간 연장요청 내역

- 당초 : 도로굴착허가일 ~ 2016. 1.31.

- 변경 : 도로굴착허가일 ~ 2016. 2.29.

라. 감 리 사 : ㈜한국건설관리공사 (☏426-8221)

마. 시 공 사 : ㈜대저건설 (☏442-1141).  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	손영란		광역도로과장	진재섭		토목부장	12/30 代서관석
협조자
시행	토목부-28433	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2561	/전송	02-3708-2599	/	syoungran23@seoul.go.kr	/	대시민공개