함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	용역기간 연장에 따른 설계변경 시행

1. 우리 정수센터에서 시행중인 『암사아리수정수센터 취·정수장 시설물 정밀안전진단 용역』의 용역기간 연장에 따른 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 암사아리수정수센터 취·정수장 시설물 정밀안전진단 용역

나. 용역기간 : 2014. 5. 19 ~ 12. 14

다. 도 급 액 : 214,318,000원(변경없음)

라. 도 급 자 : (주)한국시설안전연구원 대표 안평기 외 1

마. 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

바. 용역 변경기간

- 당 초 : 2014. 5. 19 ~ 2014. 12. 14

- 변 경 : 2014. 5. 19 ~ 2015.  5. 29

사. 용역기간 연장사유 : 정수장 운영 및 청소일정에 따른 일부 담수구조물 조사 누락에 따른 추가조사 기간 필요.

붙  임 : 1) 검토보고서 1부.

2) 합 의 서 1부.  끝.

주무관	강희권		정수시설과장	남효돈		소장	12/11 유성종
협조자	주무관	변민용		계약2팀장	홍연화
시행	정수시설과-3914	(		)	접수		(		)
우	134-852	서울특별시 강동구 아리수로 131(암사3동)	/
전화	3146-5776	/전송	3146-5707	/	kkaann2@seoul.go.kr	/	대시민공개