투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	9호선 2단계 916공구 책임감리원
(경유)
제목	업무지시(승강설비 설치공정 특별 대책 강구)

1. 9호선 2단계 916공구 건설공사와 관련입니다.

2. 9호선 2단계 928정거장 2번 출입구 구조물 공사가 지연되어 에스컬레이터 반입 및 설치가 지연되고 있으며, 928정거장 외부 1,2번 엘리베이터 철골 구조물 미설치로 엘리베이터 설치가 지연되고 있어 개통일(‘15.3.28)까지 시운전 및 완성검사가 어려울 것으로 예상되는 바

3. 감리단에서는 승강설비에 대해 특단의 대책을 강구하여 개통에 지장이 없도록 철저한 공정관리를하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	최경수		설비계획과장	전결 02/13 강재천
협조자
시행	도시철도설비부-1594	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스 8층 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7294	/전송	02-772-7308	/	kschoi2020@seoul.go.kr	/	대시민공개