서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰

우리부서에서 시행중인 ‘서울특별시 지하수관리계획 수립 용역’ 에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 서울특별시 지하수관리계획 수립 용역

2. 계 약 자 : 한국지질자원연구원 외 2

3. 계약금액 : 총차 764,068,010원(금액변경 없음)

2차 424,729,070원(금액변경 없음)

4. 준공기한 연기내역

구 분	당 초	변 경
총차 용역	‘13.5.27 ~ ’15.6.30	‘13.5.27 ~ ’15.9.30
2차 용역	‘14.3.27 ~ ‘15.6.30	‘14.3.27 ~ ‘15.9.30

붙임 : 1. 준공기한 연기 보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부(별송).  끝.

	물관리정책과장
주무관	박현우		물순환정책팀장	안준수		물관리정책과장	06/18 배광환
협조자
시행	물관리정책과-10143	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층	/
전화	02)2133-3761	/전송	02)2133-1041	/	hwpark5672@seoul.go.kr	/	대시민공개