투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	「보라매공원 복층림 조성 및 벽면녹화 공사」설계변경 시행

1. 시설과-2982(2015.6.23.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 추진 중인 『보라매공원 복층림 조성 및 벽면녹화 공사』에 대하여 아래와 같이 설계 변경하여 공사추진에 만전을 기하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 보라매공원 복층림 조성 및 벽면녹화 공사

나. 도 급 액 : 금26,135,800원(금이천육백일십삼만오천팔백원)

다. 공사기간 : 2015. 05. 11 ~ 2015. 06. 24

라. 도 급 자 : 우송조경 주식회사  대표 서진아

마. 공사비 변경내역

(단위 : 원)

구 분		공 사 금 액			비고
		당 초	변 경	증 감
총공사비		26,135,800	28,757,000	증 2,621,200
도급비	공급가액	23,759,819	26,142,728	증 2,382,909
	부가가치세	2,375,981	2,614,272	증 238,291
	소 계	26,135,800	28,757,000	증 2,621,200

바. 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원관리 및 도시녹화 지원, 보라매공원 시설물 정비, 시설비 및 부대비, 시설비

사. 공사기간 : 변경없음

붙  임 : 1. 실정사항 검토 및 설계 변경 보고서 1부.

2. 변경 내역서 1부.  끝.

주무관	김재희		시설팀장	임록화		시설과장	06/23 진병규
협조자	주무관	지정희		주무관	이전호
시행	시설과-2992	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33(신대방동)	/
전화	02)2181-1160	/전송	02)2181-1169	/	jh116@seoul.go.kr	/	대시민공개